Министерство образования культуры и спорта
Калужской области
ГОУ СПО «Коммунально-Строительный Техникум»
г. Калуга

Курсовой проект
Технология и организация строительного производства
Проект производства работ на строительство трехэтажного жилого дома в городе Калуга

Пояснительная записка
ГОУ СПО "КСТ" 2005 270103 О-41 КПТ

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Задание.
2.	Технико-экономические показатели по проекту	
3.	Разработка календарного плана.
3.1	Ведомость подсчёта номенклатуры работ.	
3.2	Подсчёт объёмов работ.	
3.3	Ведомость подсчёта объёмов работ и трудоемкости.	
3.4	Объединение работ в комплексе по циклам.
3.5	Выбор методов организации и способов производства работ.
3.6	Выбор средств механизации.	
3.7	Календарный план выполнения работ последовательным и поточным методом, сравнение вариантов.
4.	Разработка технологической карты.	
4.1	Область применения карты.
4.2	Технико-экономические показатели строительного процесса.
4.3	Технология выполнения строительного процесса.
4.4	Подсчёт объёмов работ и трудоемкости.	
4.5	Калькуляция трудовых денежных затрат.	
4.6	Материально-технические ресурсы.	
4.7	График выполнения работ.
4.8	Организация труда рабочих.	
4.9	Контроль качества.
4.10	Охрана труда и техника безопасности при выполнении строительного процесса.
5.	Проектирование строй-генплана.
5.1	Назначение строй-генплана.
5.2	Расчёт бытовок и складских площадей.
5.3	Определение потребности временного энергоснабжения строй – генплана.
6.	Охрана окружающей среды, техника безопасности и противопожарная защита на строй площадке.
Литература.

2. Технико-экономические показатели

Площадь застройки – 637,3м²
Строительный объём – 5704м²
Трудоёмкость - 1975чел-дни.
Время строительства – 91день.
Трудоемкость на 1м³ здания - 21,7м³

3. Разработка календарного плана

Календарный план проектный документ, в котором в соответствии с характером и объёмом строительно-монтажных работ устанавливаются целесообразная последовательность работ на основе правильно разработанной технологии производства работ.
Рассчитываются сроки строительства, как объекта в целом, так и отдельных строительных работ (Процессов).
Календарный план служит основой для планирования, обеспечения строительства рабочей силой, строительными материалами, конструкциями, деталями, а так же средствами механизации. 
При последовательном методе строительства сокращается потребление ресурсов, но при этом возрастает срок строительства. По этому в основном в строительстве применяют поточный метод производства строительно-монтажных работ. 
Целью поточного метода производства строительных работ является обеспечение непрерывного и ритмичного производства работ, равномерного использования денежных средств. Применение поточного метода в строительстве увеличивает выпуск продукции, повышает качество и снижает трудоемкость работ в целом всего строительства. 
Строительство ведётся по трём циклам:
1. Подземный цикл – выполняется поточным методом продолжительность цикла – 24 день.
2. Надземный цикл – выполняется поточным методом продолжительность цикла – 32 день.
3. Отделочный цикл – выполняется поточным методом продолжительность цикла – 35 день.

Общий срок продолжительности работ 91 дней.

1	2	3	4	5	6	
18	Кирпичная кладка перегородок ½ кирпича 	По ведомости	м²	134,4	3-11	
19	Устройство подмостей	V=Lпер*bпод	м²	13	6-1-30	
20	Заполнение оконных проемов	V=Pокна*n/100	100 м	0,7	6-1-14	
21	Монтаж перекрытий	По чертежу	шт	85	4-1-7	
22	Монтаж лестничных площадок	По чертежу	шт	9	4-1-10	
23	Монтаж лестничных маршей	По чертежу	шт	9	4-1-10	
		2 этаж				
24	Кирпичная кладка наружных стен	По ведомости	 м³	164	3-3	
25	Устройство подмостей	V=Vкл	10 м³	16,4	3-16	
26	Кирпичная кладка внутренних стен.	По ведомости	 м³	99	3-3	
27	Устройство подмостей	V=Vкл	10 м³	9,9	3-16	
28	Кирпичная кладка перегородок ½ кирпича 	По ведомости	м²	134,4	3-11	
29	Устройство подмостей	V=Vкл	м²	13	6-1-30	
30	Заполнение оконных проемов	По ведомости	100 м	1	6-1-14	
31	Монтаж перекрытий	V=Lпер*bпод	шт	85	4-1-7	
32	Монтаж лестничных площадок	V=Pокна*n/100	шт	6	4-1-10	
33	Монтаж лестничных маршей	По чертежу	шт	6	4-1-10	
		3 этаж				
34	Кирпичная кладка наружных стен	По ведомости	 м³	164	3-3	
35	Устройство подмостей	V=Vкл	10 м³	16,4	3-16	
36	Кирпичная кладка внутренних стен.	По ведомости	 м³	99	3-3	
37	Устройство подмостей	V=Vкл	10 м³	9,9	3-16	
38	Кирпичная кладка перегородок ½ кирпича 	По ведомости	м²	134,4	3-11	

1	2	3	4	5	6	
39	Устройство подмостей	По ведомости	м²	13	6-1-30	
40	Заполнение оконных проёмов	V=Vкл	м²	1	6-1-14	
41	Монтаж перекрытий	По ведомости	100 м	93	4-1-7	
42	Заливка швов		100 м²	5,1	4-1-26	
43	Кладка стен выше чердачного перекрытия	По ведомости	м³	39,4	3-3	
44	Устройство стропильной крыши		100 м²	113	4-1-8	
45	Устройство кровли	Vкр=Vкр	м²	6,86	6-1-8	
46	Устройство пароизоляции	V=Sчер.пр.	м²	6,86	6-1-8	
47	Укладка утеплителя	V=Vпар.	м²	448,9	11-37	

3.2 Разработка календарного плана
 
1. Разработка грунта экскаватором:

Нк=1,92

Ко=1,03
с=13м
d=50,32м
а=с+2е=13+2∙0,96=14,92м
в=d+2e=50,32+2∙0,96=52,24м

=(13∙50,32+14,92∙52,24+(13+14,92)(50,32+52,24)=0,32(654,16+779,42+2789,63)=1289,64м³

2. Объём фундамента:
Vфунд=cdНк=13∙50,8∙1,92=946,9,5м³

3. Добор грунта вручную:
Vр.д. =Sкот.∙0,1=760∙0,1=76м³
Sкот=760 м³

4. Устройство песчаной подушки:
Vп.п. =Lсм∙bпод.∙0,1=320,2∙1,2∙0,1=24,4м³

5. Монтаж фундаментных подушек и блоков:.
Подушки:	4,4×1,2=42шт		Блоки:	2,4×6=284шт
2,4×1,6=31шт				1,2×6=99шт
2,4×0,6=30шт				1,5×6=14шт
1,2×0,8=10шт				0,6×6=100шт
Итого:	103шт					497шт

6. Устройство горизонтальной гидроизоляции:
Vг.г = Lсм н.∙n=395,4∙0,7=92,26м2
Vг.г = Lсм н.∙n=211,06∙1,6=184,5м2

Где 	n-ширина слоя гидроизоляции;
Lсм н- длина наружной стены фундамента.

7. Устройство вертикальной гидроизоляции
Vв.г=Pa∙hг=211,06*1,6=337,7м2
где	hг-высота гидроизоляционного слоя.

8. Монтаж перекрытий над подвалом: 67шт

9. Заливка швов:
V=Lреб∙n=6∙76=456м2

Где	Lреб - длина плиты перекрытия;
n - Количество плит.

10. Монтаж карнизных плит:  113шт

11. Устройство стропильной крыши: 692,3м² (смотри технологическую карту)

12. Устройство кровли:
V=Vкр; 
V=692,3м2

13. Устройство пароизоляции:
V=Sчер. пер=448,9м2
Sчер. пер - площадь чердачного перекрытия.

14. Устройство утеплителя:
V=448,9м2

15. Монтаж лестничных площадок:
1   Этаж:  9шт
2,3 Этаж:  6шт

16. Монтаж лестничных маршей:
1   Этаж:	9шт
2,3 Этаж:	6шт

17. Кирпичная кладка наружных и внутренних стен (перегородок в ½ кирпича)

№
п/п	Номер
оси	Размер стены	Площадь
стены	Проёмы	Площадь
проёма	Площадь
за вычетом
проёмов	Толщина 
стены	Объем
 кладки на этаж	
		L (м)	h (м)		L (м)	h (м)	Кол-во					
Наружные стены	
1	Б-Б	48,9	2,8	136,9	1,4	1,5	11	23,1	106,3	0,64	68,0	
					0,9	1,5	2	2,7				
					0,8	1,5	4	4,8				
2	2−2	12	2,8	33,6	0,9	1,5	4	5,4	0,3	0,64	0,2	
					0,8	1,5	4	4,8				
3	Г-Г	48,9	2,8	136,9	1,4	1,5	11	23,1	106,3	0,64	68,0	
					0,9	1,5	2	2,7				
					0,8	1,5	4	4,8				
4	12−12	12	2,8	33,6	0,9	1,5	4	5,4	23,4	0,64	15,0	
					0,8	1,5	4	4,8				
5	A-A	4,8	2,8	13,4	 	 	 	 	13,4	0,38	5,1	
6	Д-Д	7,2	2,8	20,2	 	 	 	 	20,2	0,38	7,7	
Итого   	164,0	
Внутренние стены	
1	3−3	4,5	2,8	12,6	 	 	 	 	12,6	0,25	3,2	
2	4−4	5,5	2,8	15,4	 	 	 	 	15,4	0,25	3,9	
3	5−5	12	2,8	33,6	 	 	 	 	33,6	0,38	12,8	
4	6−6	6	2,8	16,8	0,9	2	1	1,8	15,0	0,25	3,8	
5	7−7	6	2,8	16,8	0,9	2	1	1,8	15,0	0,25	3,8	
6	8−8	6	2,8	16,8	 	 	 	 	16,8	0,38	6,4	
7	9−9	12	2,8	33,6	 	 	 	 	33,6	0,38	12,8	
8	10−10	6	2,8	16,8	 	 	 	 	16,8	0,25	4,2	
9	11−11	4,5	2,8	12,6	 	 	 	 	12,6	0,25	3,2	
10	В-В	48,9	2,8	136,9	0,9	2	5	9	119,1	0,38	45,3	
					1,1	2	4	8,8				
Итого   	99,0	
Перегородки	
 	 	48	2,8	134,4	 	 	 	 	134,4	 	134,4	
	
3.3 Ведомость подсчёта объёмов работ и трудоемкости

№
п/п	Наименование 
работ	Объём работ	Трудоемкость	Затраты механизмов	Состав звена	
		Ед. изм	Кол-во	ЕНиР	Норма 
на ед.	Всего
чел-час.	Кол-во
чел-дней.	Наимен
Механизма	Норма
на ед. маш-см	Кол-во
маш-см	Профессия	Разряд	
												I	II	III	IV	V	VI	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Нулевой цикл	
1	Разработка грунта экскаватором	100 м³	12,9	2-1-11	5,3	68,4	8,5	Д-271А	 	 	Экс-щик	 	 	 	 	 	 	
2	Добор гранта в ручную	 м³	76	2-1-43	1,3	98,8	12,4	 	 	 	Земл-коп	 	 	 	 	 	 	
3	Устройство песчаной подушки	 м³	24,4	СНиП2-82	1,76	42,9	5,4	 	 	 	Земл-коп	 	 	 	 	 	 	
4	Монтаж фундаментных подушек	шт	103	4-1-1	0,63	64,9	8,1	БК 100 АС	 	 	Монтажник	 	 	 	 	 	 	
5	Монтаж фундаментных блоков	шт	497	4-1-3	0,66	328,0	41,0	БК 100 АС	 	 	Монтажник	 	 	 	 	 	 	
6	Устройство вертикальной гидроизоляции	 м²	337,7	11-32	0,125	42,2	5,3	 	 	 	Изоляторщик	 	 	 	 	 	 	
7	Устройство горизонтальной гидроизоляции	 м²	276,8	11-33	0,11	30,4	3,8	 	 	 	Изолировщик	 	 	 	 	 	 	
8	Засыпка пазух	м³	342,7	2-1-34	0,77	263,9	33,0	 	 	 	Земл-коп	 	 	 	 	 	 	
9	Подсыпка грунта под полы подвала	 м³	180,4	2-1-56	0,7	126,3	15,8	 	 	 	Земл-коп	 	 	 	 	 	 	
10	Заливка швов	100 м²	4,6	4-1-26	4	18,3	2,3	 	 	 	Бетонщик	 	 	 	 	 	 	
11	Монтаж перекрытий над подвалом	шт	67	4-1-7	0,72	48,2	6,0	БК 100 АС	 	 	Монтажник	 	 	 	 	 	 	
12	Заделка монолитных участков	 м³	5,5	4-1-31	1,5	8,3	1,0	 	 	 	Бетонщик	 	 	 	 	 	 	
Надземный цикл 
1Этаж	
13	Кирпичная кладка наружных стен	 м³	164	3-3	3,1	508,4	63,6	 	 	 	Каменщик	 	 	 	 	 	 	
14	Устройство подмостей	10 м³	16,4	3-16	0,72	11,8	1,5	 	 	 	Каменщик	 	 	 	 	 	 	
15	Кирпичная кладка внутренних стен	 м³	99	3-3	3,2	316,8	39,6	 	 	 	Каменщик	 	 	 	 	 	 	
16	Устройство подмостей	10 м³	9,9	3-16	0,72	7,1	0,9	 	 	 	Каменщик	 	 	 	 	 	 	
17	Кирпичная кладка перегородок 1/2 кирпича	 м²	134,4	3-11	0,42	56,4	7,1	 	 	 	Каменщик	 	 	 	 	 	 	
18	Устройство подмостей	 м²	13	6-1-30	0,3	3,7	0,5	 	 	 	Каменщик	 	 	 	 	 	 	
19	Заполнение оконных проёмов	100 м	1,4	6-1-14	5,8	8,2	1,0	 	 	 	Плотник	 	 	 	 	 	 	
20	Монтаж перекрытий	шт	85	4-1-7	0,72	61,2	7,7	БК 100 АС	 	 	Монтажник	 	 	 	 	 	 	
21	Монтаж лестничных площадок	шт	9	4-1-10	0,22	2,0	0,2	БК 100 АС	 	 	Монтажник	 	 	 	 	 	 	
22	Монтаж лестничных маршей	шт	9	4-1-10	0,22	2,0	0,2	БК 100 АС	 	 	Монтажник	 	 	 	 	 	 	

2 Этаж	
23	Кирпичная кладка наружных стен	 м³	164	3-3	3,1	508,4	63,6	 	 	 	Каменщик	 	 	 	 	 	 	
24	Устройство подмостей	10 м³	16,4	3-16	0,72	11,8	1,5	 	 	 	Каменщик	 	 	 	 	 	 	
25	Кирпичная кладка внутренних стен	 м³	99	3-3	3,2	316,8	39,6	 	 	 	Каменщик	 	 	 	 	 	 	
26	Устройство подмостей	10 м³	9,9	3-16	0,72	7,1	0,9	 	 	 	Каменщик	 	 	 	 	 	 	
27	Кирпичная кладка перегородок 1/2 кирпича	 м²	134,4	3-11	0,42	56,4	7,1	 	 	 	Каменщик	 	 	 	 	 	 	
28	Устройство подмостей	 м²	13	6-1-30	0,3	3,7	0,5	 	 	 	Каменщик	 	 	 	 	 	 	
29	Заполнение оконных проёмов	100 м	1,4	6-1-14	5,8	8,2	1,0	 	 	 	Плотник	 	 	 	 	 	 	
30	Монтаж перекрытий	шт	85	4-1-7	0,72	61,2	7,7	БК 100 АС	 	 	Монтажник	 	 	 	 	 	 	
31	Монтаж лестничных площадок	шт	6	4-1-10	0,22	1,3	0,2	БК 100 АС	 	 	Монтажник	 	 	 	 	 	 	
32	Монтаж лестничных маршей	шт	6	4-1-10	0,22	1,3	0,2	БК 100 АС	 	 	Монтажник	 	 	 	 	 	 	
3 Этаж	
33	Кирпичная кладка наружных стен	 м³	164	3-3	3,1	508,4	63,6	 	 	 	Каменщик	 	 	 	 	 	 	
34	Устройство подмостей	10 м³	16,4	3-16	0,72	11,8	1,5	 	 	 	Каменщик	 	 	 	 	 	 	
35	Кирпичная кладка внутренних стен	 м³	99	3-3	3,2	316,8	39,6	 	 	 	Каменщик	 	 	 	 	 	 	
36	Устройство подмостей	10 м³	9,9	3-16	0,72	7,1	0,9	 	 	 	Каменщик	 	 	 	 	 	 	
37	Кирпичная кладка перегородок 1/2 кирпича	 м²	134,4	3-11	0,42	56,4	7,1	 	 	 	Каменщик	 	 	 	 	 	 	
38	Устройство подмостей	 м²	13	6-1-30	0,3	3,7	0,5	 	 	 	Каменщик	 	 	 	 	 	 	
39	Заполнение оконных проёмов	100 м	1,4	6-1-14	5,8	8,2	1,0	 	 	 	Плотник	 	 	 	 	 	 	
40	Монтаж перекрытий	шт	93	4-1-7	0,72	67	8,4	БК 100 АС	 	 	Монтажник	 	 	 	 	 	 	
41	Заливка швов	100 м²	5,1	4-1-26	4	20,4	2,6	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
42	Кладка стен выше чердачного перекрытия	 м³	39,4	3-3	2,8	110,3	13,8	 	 	 	Каменщик	 	 	 	 	 	 	
43	Монтаж Ж/Б корнизных плит	шт	113	4-1-8	0,42	47,5	5,9	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
44	Устройство стропильной крыши	100 м²	6,92	6-1-8	52,35	362,4	45,3	 	 	 	Плотник	 	 	 	 	 	 	
45	Устройство кровли	 м²	692,30	6-1-8	0,21	145,4	18,2	 	 	 	Жестянщик	 	 	 	 	 	 	
46	Устройство пароизоляции	 м²	448,9	11-37	0,11	49,4	6,2	 	 	 	Изолировщик	 	 	 	 	 	 	
47	Укладка утеплителя	 м²	448,9	11-32	0,38	170,6	21,3	 	 	 	Изолировщик	 	 	 	 	 	 	
Итого	622,5	 	

3.4 Объединение работ в комплексы по циклам

№ комплекса	№
п/п	Наименование работ	Кол-во
чел. Дни.	Всего по
комплексам	
1	2	3	4	5	
Нулевой цикл	
1	1	Разработка грунта экскаватором	8,5	8,5	
2	1	Добор грунта вручную	12,4	17,4	
	2	Устройство песчаной подушки	5,4		
3	1	Монтаж фундаментных подушек	8,1	49,1	
	2	Монтаж фундаментных блоков	41		
4	1	Устройство горизонтальной гидроизоляции	5,2	42,1	
	2	Устройство вертикальной гидроизоляции	4,5		
	3	Засыпка пазух	33		
5	1	Подсыпка грунта под полы подвала	15,8	24,1	
	2	Монтаж перекрытий над подвалом	6		
	3	Заливка швов	2,3		
Итого	141,2	
Надземный цикл	
1 Этаж	
6	1	Кирпичная кладка наружных стен	63,6	66,04	
	2	Устройство подмостей	1,5		
	3	Заполнение оконных проёмов	1,04		
7	1	Кирпичная кладка внутренних стен	39,6	68,33	
	2	Устройство подмостей	0,9		
	3	Кирпичная кладка перегородок в 1/2 кирпича	7,1		
	4	Устройство подмостей	0,5		
	5	Монтаж плит перекрытия	7,7		
	6	Монтаж лестничных площадок	0,2		
	7	Монтаж лестничных маршей	0,2		
2 Этаж	
8	1	Кирпичная кладка наружных стен	63,6	66,04	
	2	Устройство подмостей	1,5		
	3	Заполнение оконных проёмов	1,04		
9	1	Кирпичная кладка внутренних стен	39,6	68,05	
	2	Устройство подмостей	0,9		
	3	Кирпичная кладка перегородок в 1/2 кирпича	7,1		
	4	Устройство подмостей	0,5		
	5	Монтаж плит перекрытия	7,7		
	6	Монтаж лестничных площадок	0,2		
	7	Монтаж лестничных маршей	0,2		

3.6 Выбор средств механизации

Вертикальная привязка крана КБ-100АС

Высота крана:

Hкр=Hзд+Hзап+Нзл+Нстр=8,55+1+0,22+3=196+2.3+=17.51

Технические характеристики:
Грузоподъемность  - 5 тон. 
Вылет стрелы – 20 м.
Высота подъёма – 33 м.
Скорость – 10-2 м/с
Подъём груза – 0,5
Посадка груза - 0,1
Скорость перемещения – 1,8
Установленная мощность электродвигателя 38,2 кВт 

Подъёмник ТП-2 (С-447)

Подъёмник предназначен для подъема строительных материалов при строительстве зданий до 6 и 9 этажей. Подъёмник стационарный, при работе мачта подъёмника крепится к стене специальными креплениями.

Модель ТП-2 (С-447)

Грузоподъемность – 0,5т
Высота подъёма до 17м
Скорость подъёма груза 0,38 м/с
Мощность электродвигателя 3 кВт

Габарит груза платформы:
Длина – 1,5м
Ширина – 1м
Масса – 1400кг

4. Разработка технологической карты

4.1 Область применения карты

Технологическая карта разработана на устройство стропильной крыши трёх этажного дома с размерами в осях 14,4м и 48,9м. Площадью скатов 692,3м²

4.2 Технико-экономические показатели

Трудоемкость на весь объём работ:
Нормативная:			361,5чел-час.
Принятая:				320чел-час.

Выработка на одного рабочего в смену:
Нормативная:			19,56м²	
Принятая:				17,31м²

Продолжительность выполнения работ.
Объём работ 			692,3м²

4.3 Технология выполнения строительного процесса

До начала монтажа стропильной системы должны быть выполнены все работы по монтажу чердачного перекрытия. Работу по установке стропил начинают с укладки по внутренним стенам лежней, а по наружным  мауэрлатов. Мауэрлаты предварительно антисептируют путём глубокой пропиткой или обмазки пастойантисептированные мауэрлаты укладывают с прокладкой по ним двух слоёв толя со стороны стены.
На лежни устраивают стойки через 6 м, временно раскрепляют схватками, ставят подкосы и укладывают прогон. Затем на прогоне и мауэрлатах производят разбивку положения стропильных ног. Врубка стропильных ног в мауэрлат производится врубкой в зуб. У конька стропильные ноги попарно соединяют в пол дерева. Для придания пространственной жёсткости стропильных ног к ним крепят на гвоздях ригели, скрепляя каждую пару стропильных ног с обеих сторон. Далее после установки стропильных ног по ним устраивают обрешётку. Обрешётка выполняется из бруска сечением    50мм × 50 мм. Бруски обрешётки укладываются вдоль конька через 510мм.
На карнизных свесах выполняется сплошная дощатая обрешётка. Устройство обрешётки начинают сразу же вслед за установкой первых четырех – пяти стропильных ног.

3.4 Подсчёт объёмов работ

Sкр=2Sтр+2Sтрап
Sтр=14×7=49 м²
2Sтр=Sтр+Sтр=49+49=98 м²
Sтрап= H(a+b)/2=7(48,9×36)/2=297,15 м²
2Sтрап=297,15*2=594,3 м²
Sкр=2Sтр+2Sтрап=98+594,3=692,3 м²

4.5 Калькуляция трудовых и денежных затрат

Обоснование
ЕНиР и д.р.	Состав работ	Ед. изм.	Объём
работ	Норма времени
на ед. изм.
Чел-час.	Расценка на ед. изм.
Руб-коп.	Затраты труда
на весь объём работ
чел-час.	Стоимость затрат труда на весь объём работ.	
§ 6-1-8
2	Укладка на место
мауэрлатов	100м²	6,923	1,5	0-78,1	10,4	5,4	
§ Е 6-1-8
3б	Установка на место стропил	100м²	6,923	35	18-23	242,3	126,2	
§ Е 6-1-8	Укладка выверка и правка обрешетки	100м²	6,923	14,5	7-55,0	99,5	52,3	
§ Е 6-1-9	Сборка всего каркаса слуховых окон	100м²	6,923	1,35	0-70,3	9,3	4,9	
Итого	361,5	188,7	

4.6 Материально-технические ресурсы

Наименование	Ед. изм.	Кол-во	
Материалы, полуфабрикаты, изделия.
1.	Доски б – 50мм
2.	Бруски
3.	Гвозди
4.	Бревно для стропил
5.	Антисептическая паста
6.	Толь
7.	Поковки	
м³
м³
кг
м³
кг
м²
кг	
0,7
6
13
21
30
9
20	
Оборудование инструменты и приспособления.
1.	Пила поперечная
2.	Пила - ножовая
3.	Уровень
4.	Отвес
5.	Молоток
6.	Топор
7.	Рулетка металлическая
8.	Нивелир с рейками
9.	Электродрель
10.	Инвентарные подмости на козелках
11.	Дисковая электропила
12.	Подъемник	
шт 
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт 	
2
2
1
2
3
3
2
1
1
7,5
1
1	

4.8 Организация труда рабочих

Состав рабочих по профессии и квалификации (5 человек) звено состоит из плотников:
1разр (подсобный рабочий) – 1 чел.
2разр – 2 чел.
3разр – 1 чел.
4разр – 1 чел.

Распределение работы между исполнителями:
Сначала два плотника (4разр-1 и 2разр-1) производят заготовку и укладку мауэрлатов. В   это время оставшиеся рабочие (1разр-1, 2разр-1 и 3разр-1) начинают выполнять работы по установке стропил, закончив укладку мауэрлатов, рабочие (4разр-1 и 2разр-1) присоединяются к рабочим   (1разр-1, 2разр-1 и 3разр-1), делают врубку стропильных ног, установку стоек, укладку прогонов они заканчивают вместе. Затем всё звено плотников приступает к укладке брусков обрешётки, уложив некоторые количество брусков обрешётки, уложив некоторые количество трое рабочих (4разр-1, 2разр-1 и 1разр-1) начинают выполнять работы по устройству слуховых окон, а в это время рабочие (3разр-1 и 2 разр-1) делают работы по устройству обрешётки.

4.9 Контроль качества

Организация и схема операционного контроля качества работ.
Наименование операции	Контроль качества работ.	
Производителем работ	Мастером	Состав	Способ	Время	
1	2	3	4	5	
Подготовительные работы	−	Должны быть выполнены работы по монтажу чердачного перекрытия, устройства карниза, возведению и монтажу дощатых труб и вентиляционных стояков сверх чердачного перекрытия и крыши. Все элементы стропил (мауэрлаты, подкосы, стропильные ноги) заранее заготовляются по шаблонам и подают на чердачное перекрытие.	Визуально	До начала монтажа	
Укладка мауэрлатов	−	Мауэрлаты антисептируют путём пропитки и обмазки устройство гидроизоляции со стороны стены (2 слоя толя) 	Визуально	Инструментально	
		По внутренней стены укладывают лежни по наружным мауэрлатах	До укладки мауэрлатов		
Устройство стоек	-	На лежень устанавливают стойки, временно закрепив их схватками, устраивают подкосы. Прогоны, подкосы и стойки скрепляют стальными скобами.	Визуально		
Устройство стропил	-	Производят разработку на прогоне и мауэрлатах проектного положения стропильных ног, выбирают гнёзда и укладывают в них стропильные ноги. Скрепление стропильной системы производится скобами и болтами.	Инструментально		
		Проверка правильности проектного положения всех установленных элементов	Инструментально		

1	2	3	4	5	
Устройство слуховых окон	-	После прибивки брусков делают в обрешётке вырезы для слуховых окон и монтируют их.			
Устройство обрешётки	-	Устройство обрешётки начинают после установки четырёх стропильных ног. Бруски прибивают от карниза к коньку			

Отклонение в размерах несущих конструкций.

Отклонения	Величина, допускаемая отклонением мм.	
По длине конструкции
По высоте конструкций  и опор
В расстояниях между осями конструкции
Конструкций по вертикали
Отдельных сжатых элементов конструкций от проектного положения	± 20
± 10
± 10
± 0,2 %
1/300 длины элемента.	
Смещение центра опорных узлов от центра опорных площадок	± 10	
В глубине врубок 
В размерах поперечных сечений	± 2,5
± 2	
В расстояниях между центрами рабочих болтов и нагелей в соединениях:
Для входных отверстий
Для входных отверстий поперёк волокон	

± 2
2% толщины патока, но не более 5 мм	
В расстояниях между центрами гвоздей со стороны забивки в гвоздевых соединениях	± 2

4.10 Охрана труда и техника безопасности при выполнении строительного процесса

При монтаже деревянных элементов и конструкций соблюдаются основные меры техники безопасности. Перед началом работ следует проверить исправность и прочность насадки деревянных рукояток инструментов.  Для прохода рабочих по перекрытиям без пола надо укладывать по балкам временные настил шириной не менее 70 см.
На перекрытиях, допуска только сборка и пригонка конструкций; работы по изготовлению недостающих деталей (Рубка тёска и прочее) в указаниях местах не разрешаются.
При использовании электрифицированного инструмента к работе допускается только лица  прошедшие соответствующее производственное обучение. Особенное внимание должно быть удалено обеспечению безопасности работ связанных с антисептированием и огнезащитной обрешётки древесины в частности.
Запрещается допускать к работе по антисептированию, а ток же по погрузке, разгрузке и распаковки химикатов, лиц не прошедших специальное обучение. Сосуды с химикатами должны быть закрыты плотными крышками. Рабочие должны быть обеспечены защитными костюмами, очками, рукавицами и респираторами. 

5. Проектирование строй - генплана

5.1 Назначение строй - генплана

В составе проекта производства работ разрабатывается строительный генеральный план на строительства отдельного здания (сооружения) или на выполнение отдельных видов строительных, монтажных или специальных строительных работ, в зависимости от того, на что разрабатывается проект. На строительном генеральном плане даются детальные решения по организации той части строительного хозяйства  площадки, которая непосредственно связано с возведением данного здания или сооружения и охватывает территорию, непосредственно примыкающая к нему. Строительный генеральный план разрабатывается с указанием границ строительной площадки и видов ее ограждений, действующих и временных подземных, надземных и воздушных сетей и коммуникаций, постоянных и временных дорог, схем движения средств транспорта и механизмов, мест установки строительных и грузоподъемных машин с указанием путей и их перемещения и зон действия, размещение постоянных, строящихся и временных зданий и сооружений, опасных зон, площадок и помещении	 складирования материалов и конструкций, расположение помещений для санитарно – бытового обслуживание строителей, а так же зон повышенной опасности. 
Исходными данными для разработки строительного генерального плана служат:
Решения строительного генерального плана в составе проекта организации строительства:
Комплексный сетевой график или календарный план производства работ:

Технологические карты. 
Графическая часть строительного генерального плана в составе проекта производства работ выполняется, как правило, в масштабе 1:200 и 1:500 и содержит основном те же элементы, что и строительный генеральный план в проекте организации строительства. 
Строительный генеральный план уточняет принципиальные решения, принятые в проекте организации строительства и, как и всякий рабочий чертёж, должен содержать детальные и исчёрпывающие данные , необходимые для реализации проектных решений в натуре.
Расчётно-пояснительная записка должна содержать уточнённые расчёты и обоснования потребности строительства во временном строительном хозяйстве на основе натуральных (физических) объёмов работ, определённых по данным рабочей документации (Рабочего проекта), а так же конкретные технические решения по выбору строительных машин механизированных установок, временных зданий, сооружений и др.

5.2 Расчёт бытовок и складских помещений

Расчёт бытовых помещений (вагончиков).
Максимальное число рабочих – 38 человек.
S=38∙1,7=64,6
Принимаем число вагончиков размером 7,3×2,9 и контору 7,3×2,9

Расчёт уборных:
Из расчёта 1-го очка на 25 человек, принимаем 2очка Площадь уборной 7,2 м² (2,4×3) 

Расчёт складских помещений:
Объём кладки на этаж составляет 271,1 м², В 1 м² - 400 кирпичей.
Qкир=271,1∙400          108440 = 
Норма хранения кирпича 0,7

Принимаю 2 склада площадью =96,8 м²
Железобетонные изделия:
Лестничные площадки – принимаем 3 штабеля по 3 шт.
Монтаж лестничных маршей – принимаем 4 штабеля по 2 шт.
Плиты перекрытия:
1,5×6 – Принимаем 5 штабелей по  8 шт.
1×6 – Принимаем 3 штабеля по 8 шт.

Электроснабжение:
Рт.р.=1,1 
Рт.р.=
∑Рс=6+38,2+3,1+0,27=47,57
∑Ров=
∑Рон=

Норма освещения:
1.	Контора на 100 м²=1,5кВт
2.	Бытовки на 100 м²=1,2кВт
3.	Склад на 100 м²=0,5кВт
4.	Внутриплощадочная дорога 1 км=2,5кВт
5.	Охранное освещение 1км=1,5кВт
6.	Кран=38,2кВт
7.	Подёмник=3кВт
8.	Штукатурная станция=3,1кВт
9.	Малярная станция=0,27кВт.

6. Охрана окружающей среды

Проектные решения по охране окружающей среды заключается во всемирной локализации неблагоприятного воздействия строительного производства на земляные и воздушные ресурсы нашей страны.
Задача состоит в умении неблагоприятных последствий такого воздействия и восстановление нарушенного строительными работами экологического  равновесия.
К данным мероприятием относятся:
1. Выделение минимально необходимой полосы отвода земель для проектируемого проекта и работы строительного подразделения.
2. Рекультивация нарушенных земель, приведение их в состояние, пригодное для использования их по назначению. Необходимость рекультивации распространяется на земляные сооружения, места выемок грунта всех видов, включая карьеры, а также нарушение состояния земель без их занятия, проведение изыскательных работ.
3. Выбор способов производства работ, обеспечивающих минимальное нарушение состояния окружающей среды; соблюдение санитарных норм при расположении складов горюче-смазочных материалов, мест стоянок, машинных парков и др. 

Техника безопасности, охрана труда и противопожарная защита
Требование правил безопасного выполнения СМР следует учитывать на всех этапах организации строительного производства.
К технологическим мероприятиям по охране труда относится:
1. Меры по устранению возможных нарушений прочности элементов при монтаже и кладке.
2. Правильный подбор существующих и разработка новых устройств и приспособлений для безопасного выполнения работ.
3. Разработка мер по обеспечению электро-безопасности.
4. Обеспечение безопасности при применении токсичных материалов.
5. Обеспечение безопасности при работе в зимних условиях.
6. Организация сан - гигиенического и бытового обслуживания рабочих на стройплощадке.
7. Выбор искусственного освещения стройплощадки, рабочих мест, проходов и проездов.
8. Безопасное складирование материалов.
9. ограждение безопасных зон.
10.Устройство временных автодорог.

Особое внимание уделяется пожарной безопасности.
1. Надо указать места расположения пожарных щитов пожарной безопасности и ответственных лиц.
2. Наличие и состав средств пожаротушения.
3. Расположение пожарных гидрантов.
4. Наличие мест для курения.
5. Наличие площадок по складированию огнеопасных материалов.
6. Размещение мест для производства сварочных работ.
7. Наличие и расположение знаков ССБТ и плакатов о мерах безопасности.
8. Обустройство стройплощадки пожарной связью и сигнализацией.

Литература

1.	М.П. Зимин "Технология и организация строительного производства".
2.	СНиП III-4-80 Техника Безопасности в строительстве М. Стройиздат 1981г.
3.	ЕНиР сборник Е4.
4.	Альбом средств механизации ремонтно-строительных работ. Стройиздат Ленинград.
5.	А.Д. Любарский "Технология и организация строительного производства", "Охрана труда".
6.	А.Н. Смирнов 
7.	С.Д. Химунин "Указания по технологии ремонтно-строительного производства и техническим картам на работы при капитальном ремонте жилых домов" М. Строительства 1977г. Книга №2.
8.	С.С. Добронравов справочник "Строительные машины и оборудование".
9.	ЕНиР №3
10.	ЕНиР №6
11.	ЕНиР №8
12.	ЕНиР №11